Приложение № 1 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт (включительно) с учетом ранее присоединенной мощности, по одному источнику энергоснабжения (3 категория надежности электроснабжения)
наименование услуги (процесса)
Круг заявителей: физические или юридические лица
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: тарифы утверждены органом исполнительной власти субъекта РФ на период регулирования, ответственным за тарифное регулирование
Условия оказания услуги (процесса): 1. Подача заявки в объеме, установленным законодательством; 2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения; 3. Исполнение условий, установленных заключенным договором об осуществлении технологического присоединения.
Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с подачей напряжения и выдачей акта технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
Общий срок оказания услуги (процесса): в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного заявителя:
-	4 месяца, если расстояние от границ участка заявителя до существующих сетей сетевой организации заявляемого класса напряжения менее 300/500м, и сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), за исключением работ по строительству объектов электрохозяйства от существующих объектов до присоединяемых энергопринимающих устройств:
-	6 месяцев, если расстояние от границ участка заявителя до существующих сетей сетевой организации заявляемого класса напряжения менее 300/500м1;
В иных случаях:
-	1 год.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№	Этап	Содержание/Условия этапа	Форма предоставления	Срок исполнения	Нормативный правовой акт	
1.	Подача заявки на технологическое присоединение	Для заключения договора Заявитель направляет заявку в сетевую организацию.	Заявителем: В бумажном виде или в электронном виде через сайт МУП «Александровэлектросеть»	-	п.7(а), 8 «Правил ТП...» 	
1.1	-	При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством, сетевая организация уведомляет об этом заявителя	Сетевой организацией: В бумажном виде	В течение 6 рабочих дней с даты получения заявки.	п.15 «Правил ТП.»	
2.	Заключение договора		В бумажном виде		п.7(б) «Правил ТП.»	
2.1.	-	Подготовка, направление (выдача)* сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями в 2 экземплярах для подписания договора заявителем.
*Заявитель имеет возможность получить проект договора лично в офисе обслуживания потребителей	-	-	15 дней со дня получения заявки;
При отсутствии сведений (документов):
-	30 дней с даты получения недостающих сведений.	п.15 «Правил ТП.»	
2.2.	-	Подписание договора заявителем.
Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора и в течение 30 дней с даты получения проекта договора направляет (представляет в офис обслуживания потребителей) 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор * * приложение для юр. лиц	-	-	30 дней со дня получения заявителем проекта договора
В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 60 дней
-	заявка аннулируется.	п.15 «Правил ТП.»	
2.3.	-	Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки)	-	не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора	п. 15(1) «Правил ТП.»	

		электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора и копии представленных документов заявителем.				
3	Выполнение
сторонами
мероприятий,
предусмотренных
договором				п.7(в) «Правил ТП.»	
3.1.	-	Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.	В бумажном виде	-	п. 18(б) «Правил ТП.»	
3.2.	-	Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной. Заявитель с максимальной мощностью энергопринимающих устройств менее 150 кВт, вправе в инициативном порядке представить в сетевую организацию, разработанную им проектную документацию на подтверждение ее соответствия техническим условиям.	В бумажном виде	Согласование в течение 10 дней со дня получения сетевой организацией проектной документации от заявителя	п.18(в), 18(5) «Правил ТП.»	
3.3.	-	Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией согласно договору.
Заявитель самостоятельно обеспечивает проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого  хозяйства от объектов сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств.	-	-	п. 18(г) «Правил ТП.»	
3.4	-	Письменное уведомление в сетевую организацию от заявителя о выполнении технических условий с приложением документов:
а)	копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;
б)	копии разделов проектной документации, предусматривающих техническое решение обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе по схеме внешнего электроснабжения, если ранее такая документация не была представлена в сетевую организацию (если в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);
в)	документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных	В бумажном виде	-	п..85, 86 «Правил ТП.»	

		испытаний;*
г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки). *
*не предоставляется, если электро.хозяйство заявителя включает только: вводное устройство до 1000 В, осветительные установки, переносное эл. оборудование и энергопринимающие устройства - не выше 380 В.				
4.	Проверка выполнения технических условий			В течение 10 дней со дня получения уведомления о выполнении и документов от заявителя.	п.18(д), 82-91 «Правил ТП...»	
4.1.	-	1.	Проверка	соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах.
2.	Проведение	осмотра энергопринимающих устройств заявителя.	-		п.18 (д), 92-102 «Правил ТП.»	
4.2.	-	Заявителю выдается Акт осмотра, Акт о выполнении технических условий. В случае выявленных замечаний в результате осмотра энергопринимающих устройств акт выполнения технических условий оформляется после устранения выявленных нарушений.	В бумажном виде	В день осмотра (при отсутствии замечаний)	п.88, п.89 «Правил ТП ...»	
4.3.	-	Уведомление от заявителя об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению.	В бумажном виде		п.89 « Правил ТП.»	
4.4.	-	Повторный осмотр сетевой организацией.		В течение 3 рабочих дней после получения уведомления об устранении замечаний.	п.89 « Правил ТП.»	
4.5.	-	Прием в эксплуатацию прибора учета. Приглашение сетевой организацией представителя энергосбыта для участия в процедуре допуска в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами Акт допуска в эксплуатацию прибора учета. Передача заявителю акта допуска в эксплуатацию приборов учета.	В бумажном виде	В день проведения проверки	Раздел Х
«Основных
положений
функционировани
я розничных
рынков.»	

5.	Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям			В установленный договором срок.		
5.1	-	Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").		Не позднее 5 рабочих дней со дня проведения проверки выполнения технических условий.	п.7(г1), 7(г2), 18(ж) «Правил ТП.»	
5.2.	-	Выдача сетевой организацией Актов для подписания заявителем:
Акт об осуществлении технологического присоединения; Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон; Акт оказания услуг.	В бумажном виде		п.7 (д), п.19 «Правил ТП.»	
5.3.	-	Направление Сетевой организацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию	В электронном или бумажном виде.	В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию.	п.19(1) «Правил ТП.»	

Контактная информация для направления обращений: Центр обслуживания потребителей по телефону 8(49244)2-27-54, Личный кабинет Заявителя.