Приложение № 1 к Единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций
ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт
наименование услуги (процесса)
Круг заявителей: юридическое лицо/индивидуальный предприниматель.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимание: в соответствии с тарифами, установленными уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется в следующем порядке:
а)	10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;
б)	30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;
в)	20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;
г)	30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;
д)	10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.
Условия оказания услуг (процесса): потребителем подается заявка на технологическое присоединение, а также документы определенные Правилами ТП, утв. ПП РФ № 861. На основании указанных документов МУП «Александровэлектросеть» готовит договор и технические условия, выполняет мероприятия по технологическому присоединению до границы земельного участка заявителя.
Результат оказания услуги (процесса): технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя с подачей напряжения и выдачей акта технологического присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон и акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.
Общий срок оказания услуги (процесса): в зависимости от объема исполнения мероприятий сетевой организацией по техническим условиям для конкретного заявителя, не более 180 дней.
Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):
№	Этап	Содержание/Условия этапа	Форма предоставления	Срок исполнения	Ссылка на нормативный правовой акт	
1.	Получение заявки на технологическое присоединение юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	Клиент готовит заявку на ТП, а также пакет необходимых документов и направляет их в сетевую организацию, объекты которой находятся на наименьшем расстоянии от присоединяемого	Заявка на ТП вместе с документами может быть подана следующими способами:
-	лично, при визите в  МУП «Александровэлектросеть»;
-	почтовым отправлением в адрес	В день подачи	Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 - Правила ТП.	

	максимальная мощность энергопринимающих устройств, которых составляет до 670 кВт	объекта заявителя.
Заявка должна соответствовать
требованиям Правил ТП.	МУП «Александровэлектросеть»; - через систему «Личный кабинет», размещенную на официальном сайте  МУП «Александровэлектросеть» в сети интернет.			
2.	Подготовка договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий	На основании поданной заявителем заявки готовится договор и технические условия.	Договор и технические условия, подписанные со стороны  МУП «Александровэлектросеть» направляются заявителю почтой, либо выдаются на руки.	15 календарных дней	Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004	
3.	Выполнение мероприятий по технологическому присоединению сетевой организацией	Строительство новых и усиление существующих объектов электросетевого хозяйства в соответствии с техническими условиями. Мероприятия выполняются до границы участка заявителя.	-	180 дней, в том числе 125 дней на выполнение строительных работ	Градостроительный кодекс РФ № 190- ФЗ от 29.12.2004
Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г.
Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004	
4.	Выполнение мероприятий заявителем	Заявитель выполняет мероприятия в соответствии с техническими условиями в границах своего участка.	Направление в адрес сетевой организации уведомления об исполнении технических условий	В течение срока выполнения мероприятий, предусмотренных договором ТП.	Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004	
5.	Включение объекта. Выдача документов	На основании уведомления заявителя сетевая организация осуществляет проверку выполнения им технических условий, выдает соответствующие акты, осуществляет включение объекта.	Акт осмотра электроустановки, акт допуска приборов учета, Акт о выполнении ТУ, АРБП, АРЭО, АТП, Акт о согласовании технологической и аварийной брони.	Проверка должна быть выполнена в течение 10 календарных дней с момента поступления уведомления. Выдача документов (Акт осмотра, Акт о выполнении ТУ, Акт допуска) осуществляется в течение 3-х календарных дней с момента проверки при условии отсутствия замечаний к присоединяемым электроустановкам. Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, с оформлением соответствующих актов в течение 5 рабочих дней с момента подписания вышеуказанных актов.	Постановление Правительства РФ № 861 от 27.12.2004	

Контактная информация для направления обращений: центр обслуживания потребителей 8(49244)2-27-54, Личный кабинет Заявителя.